ủy ban nhân dân	       cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
 tỉnh bình thuận		                §ộc lập - Tự do - Hạnh phúc      30  

Số: 30     /2002/QĐ/UBBT            Phan Thiết, ngày 18   tháng 4   năm 2002

quyết định của ubnd tỉnh bình thuận
Về việc: Ban hành quy định về tổ chức thực hiện quy chế quản lý đầu t và 
xây dựng các công trình hạ tầng thuộc Chơng trình 135 trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận

 ubnd tỉnh bình thuận
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã đợc Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tớng Chính phủ  về việc phê duyệt Chơng trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa; 
-Căn cứ Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 của Thủ tớng Chính phủ về việc hợp nhất dự án Định canh định c, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, chơng trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao vào Chơng trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chơng trình 135).
- Căn cứ Thông t Liên tịch số 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 của Liên Bộ : Kế hoạch và Đầu t - ủy ban Dân tộc và Miền núi - Tài chính - Xây dựng về hớng dẫn quản lý đầu t và xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chơng trình 135.
- Theo đề nghị của Trởng Ban Dân tộc - Miền núi (cơ quan thờng trực Chơng trình 135 tỉnh) tại văn bản số 132/DTMN ngày 1/4/2002. 
quyết định

§iều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổ chức thực hiện quy chế quản lý đầu t và xây dựng các công trình hạ tầng thuộc Chơng trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
 Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 56/2000/QĐ-CT.UBBT ngày 6/12/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND- UBND tỉnh, Thủ trởng các Sở, Ban, ngành: Ban Dân tộc - Miền núi, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu t, Nông nghiệp- PTNT, Tài chính- Vật giá, Kho bạc Nhà nớc, Chủ tịch UBND các huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Chủ tịch UBND các xã có thực hiện Chơng trình 135 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                              		TM.ubnd tỉnh bình thuận
- Nh điều 3                                                                          chủ tịch
- UB DT và MN
- TT. Tỉnh ủy
- TT.HĐND tỉnh
-Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh
- Ban TT UB MTTQ tỉnh				
- Báo Bình Thuận
- Đài Phát thanh TH tỉnh	                                                 
- Lu:  + VPUB                                                                  Huỳnh Tấn Thành
+XDCB
+ NLN

ủy ban nhân dân	       cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
 tỉnh bình thuận		                §ộc lập - Tự do - Hạnh phúc        

QUY ĐịNH
Về tổ chức thực hiện quy chế quản lý đầu t và xây dựng các công trình
hạ tầng thuộc Chơng trình 135 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2002/QĐ/UBBT ngày     tháng 4  năm 2002 của  UBND tỉnh Bình Thuận)
------------------------------------

Chơng I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

§iều 1 : Bản quy định này quy định những nội dung chủ yếu về tổ chức thực hiện quy chế quản lý đầu t và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã thuộc Chơng trình 135 theo Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 của Thủ tớng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có mức vốn đầu  t	 từ 1 tỷ đồng trở xuống. 
Đối với các công trình hạ tầng thuộc Chơng trình 135, có mức vốn đầu t từ trên 1 tỷ đồng, việc quản lý đầu t và xây dựng thực hiện theo quy định về tổ chức thực hiện quy chế quản lý đầu t xây dựng và quy chế đấu thầu hiện hành của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Điều 2 : Ban Dân tộc - Miền núi là cơ quan Thờng trực Ban điều hành quản lý Chơng trình 135 của tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chơng trình 135 trên địa bàn tỉnh theo hớng dẫn của các Bộ, ngành trung ơng và những quy định tại bản quy định này.

Chơng II
NHữNG QUY ĐịNH Cụ THể
 §iều 3 : Chủ đầu t:
1/ Đối với dự án thuộc  tỉnh quản lý thì Ban Dân tộc - Miền núi làm chủ đầu t.
2/ Đối với dự án thuộc huyện quản lý thì UBND huyện làm chủ đầu t.
3/ Đối với dự án thuộc xã thì UBND xã làm chủ đầu t.
Điều 4 : Ban quản lý Dự án.
Chủ đầu t có thể quyết định thành lập Ban quản lý Dự án(nếu thấy cần thiết) để giúp mình tổ chức thực hiện và quản lý dự án theo quy định hiện hành của Nhà nớc.
Điều 5 : Trình tự lập kế hoạch đầu t .
1/ Hàng năm, theo định kỳ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách. Căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phơng đã đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện có văn bản hớng dẫn UBND các xã tổ chức họp dân lấy ý kiến nhân dân trong xã về nhu cầu xây dựng công trình (dựa vào thứ tự u tiên của dự án quy hoạch hạ tầng chơng trình 135 của xã đợc duyệt). Sau khi đợc sự thống nhất của nhân dân trong xã và đợc Hội đồng nhân dân xã quyết định, UBND xã lập kế hoạch đầu t xây dựng công trình hạ tầng gửi UBND huyện xem xét tổng hợp đầu t các xã trên địa bàn huyện gửi về Ban Dân tộc - Miền núi (cơ quan Thờng trực Chơng trình 135 của tỉnh). Ban Dân tộc - Miền núi tổng hợp kế hoạch Chơng trình 135 trên địa bàn tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu t tổng hợp Chơng  trình 135 và lồng ghép các chơng trình, dự án trên địa bàn xã có chơng trình 135 báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để đăng ký kế hoạch với ủy ban Dân tộc và Miền núi và Bộ Kế hoạch và Đầu t theo quy định.
2/ Căn cứ kế hoạch đợc Chính phủ giao, theo đề nghị của Ban chỉ đạo Chơng trình tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch đầu t Chơng trình 135, kèm theo danh mục công trình cho từng xã. Đảm bảo tất cả các xã thuộc Chơng trình 135 đều đợc đầu t, nhng không chia đều, tùy theo yêu cầu cấp thiết của công trình và khả năng chuẩn bị đầu t của từng xã mà bố trí cho hợp lý không quá 2 hạng mục công trình cho 1 xã. Công trình ghi kế hoạch thực hiện không quá 2 năm.
3/ Căn cứ kế hoạch đợc giao, Thờng trực chơng trình 135 của tỉnh(Ban Dân tộc Miền núi)có trách nhiệm thông báo cho các chủ đầu t đợc biết để có kế hoạch triển khai thực hiện.
Điều 6 : Công tác chuẩn bị đầu t.
1/ Công trình đợc đa vào kế hoạch chuẩn bị đầu t phải có trong dự án quy hoạch hạ tầng Chơng trình 135 đợc duyệt và theo thứ tự u tiên đã sắp xếp trong Dự án.
Hàng năm, đồng thời với việc đăng ký kế hoạch thực hiện đầu t, chủ đầu t dự án phải đăng ký kế hoạch chuẩn bị đầu t cho năm sau, trình UBND tỉnh quyết định cùng lúc với giao kế hoạch hàng năm.
  2/ Lập báo cáo đầu t :
  2.1: Trình tự, nội dung lập báo cáo đầu t thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nớc.
 2.2 : Những công trình chỉ đào, đắp, kỹ thuật đơn giản nh đờng thôn, bản, phai đập, kênh mơng, kênh dẫn nớc từ suối về, đào giếng, xây dựng bể chứa nớc gia đình, lớp học ở thôn, bản, san lấp mặt bằng, công trình dân tự khai hoang lấy đất sản xuất nông - lâm nghiệp có mức vốn đầu t dới 100 triệu đồng thì chủ đầu t dự án chỉ cần lập danh mục, khối lợng dự toán công trình và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đầu t, không lập báo cáo đầu t.
2.3 : Những công trình khác phải lập báo cáo đầu t. Chi phí lập báo cáo đầu t thực hiện theo hớng dẫn của Bộ Xây dựng.
2.4: Những công trình trong dự án quy hoạch  đầu t hạ tầng đợc duyệt có đủ các nội dung quy định của Thông t số 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu t thì không lập báo cáo đầu t, đợc tiến hành ngay bớc lập thiết kế dự toán.
 Điều 7 : Thẩm định và quyết định đầu t :
1/ Thẩm định báo cáo đầu t :
Chủ đầu t trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đầu t, không thẩm định.
2/ Quyết định đầu t :
2.1: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu t phê duyệt báo cáo đầu t đối với các dự án thuộc tỉnh quản lý.
2.2: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo đầu t các dự án thuộc huyện và xã quản lý. Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo đầu t phải dựa trên cơ sở dự án quy hoạch cơ sở hạ tầng đợc duyệt (quy mô, khối lợng, vốn đầu t).
Trờng hợp có thay đổi so với dự án quy hoạch cơ ở hạ tầng đợc duyệt thì phải thỏa thuận với cơ quan Thờng trực Chơng trình 135 tỉnh trớc khi phê duyệt.
2.3 : Nội dung quyết định đầu t thực hiện đúng theo Thông t hớng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu t.
2.4 : Văn bản phê duyệt Báo cáo đầu t, đợc gửi cho cơ quan Thờng trực Chơng trình 135 tỉnh biết để thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Điều 8 : Đền bù giải tỏa mặt bằng :
1/ Trong quá trình triển khai xây dựng công trình, nếu cần thiết phải giải tỏa mặt bằng để xây dựng thì thực hiện việc đền bù giải tỏa theo đúng quy định hiện hành của Nhà nớc.
2/ Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện phê duyệt phơng án đền bù giải tỏa mặt bằng đối với các công trình thuộc Chơng trình 135.
Phòng Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính, địa chính huyện thẩm định phơng án và dự toán đền bù trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
3/ Chủ đầu t tổ chức thực hiện việc chi trả đền bù giải tỏa mặt bằng  đúng theo quy định, đồng thời tổ chức thực hiện việc tái định c cho dân (nếu có)
Điều 9 : Lập thiết kế - dự toán :
1/ Việc lập, thiết kế dự toán thực hiện theo hớng dẫn của Bộ Xây dựng 
2/ Trong dự toán công trình, chủ đầu t phải lập riêng 2 phần : Phần thuê các doanh nghiệp thực hiện và phần do xã đảm nhận để nhân dân tự làm (nếu có khối lợng do xã tự làm).
Điều 10 : Thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán :
1/ Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ  tịch UBND huyện phê duyệt thiết kế dự toán các công trình thuộc huyện và xã quản lý. Sau khi phòng giao thông - công nghiệp - xây dựng huyện thẩm định và trình phê duyệt thiết kế dự toán.
Đối với các dự án thuộc tỉnh quản lý, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định phê duyệt theo quy định.
2/ Thời gian thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nớc.
3/ Lệ phí và chi phí  thẩm định thiết kế kỹ thuật (tổng dự toán), dự toán theo hớng dẫn của Bộ, Ngành Trung ơng.
Điều 11 : Tổ chức thi công
1/ Đối với công trình (hạng mục công trình) do xã đảm nhận thi công :
1.1: Trờng hợp Ban Dân tộc Miền núi, huyện làm chủ đầu t :
Chủ đầu t hoặc chủ đầu t uỷ thác cho Ban quản lý dự án của mình ký hợp đồng với xã về phần khối lợng do xã đảm nhận thi công, đồng thời có trách nhiệm cử ngời thờng xuyên theo dõi, giúp xã về kỹ thuật và nghiệm thu thanh toán khối lợng do xã thực hiện theo quy định.

1.2: Trờng hợp do xã làm chủ đầu t :
Ban quản lý dự án xã ký hợp đồng với dân phần công việc do nhân dân trong xã làm, sau khi nghiệm thu sẽ đợc thanh toán theo giá trị khối lợng thực hiện theo quy định hiện hành.
Trờng hợp khối lợng nhân dân trong xã không đảm nhận thi công đợc (có biên bản họp dân) thì mới thuê các đơn vị doanh nghiệp thực hiện.  Việc thuê doanh nghiệp thực hiện  theo Điều 12 của quy định này.
2/ Khi nhà thầu thuê lao động của xã thực hiện phần khối lợng của mình đã đợc chỉ định thầu, nhà thầu phải trả tiền công cho ngời lao động tham gia  xây dựng công trình không thấp hơn đơn giá dự toán đợc duyệt(có sự giám sát của Ban giám sát xã và xác nhận của Ban quản lý dự án).
Điều 12 : Chỉ định thầu :
1/ Các công trình thuộc phạm vi áp dụng của Bản quy định này nếu thuê doanh nghiệp thực hiện, đợc phép chỉ định thầu (không đấu thầu). Khuyến khích đấu thầu đối với các công trình có mức vốn đầu t từ 500 triệu đồng trở lên (bao gồm cả xây lắp và thiết bị).
Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu t, Chủ tịch UBND huyện đợc phép chỉ định thầu đối với báo cáo đầu t đợc uỷ quyền phê duyệt. Sau khi quyết định chỉ định thầu văn bản đợc gửi cho cơ quan Thờng trực Chơng trình 135 của tỉnh biết để thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo với Trung ơng, UBND tỉnh trong quá trình thực hiện.
2/ Những công trình hoặc hạng mục công trình chỉ đào, đắp kỹ thuật đơn giản, mức đầu t dới 100 triệu đồng,  công trình khai hoang lấy đất sản xuất hoặc những công trình xã tự nhận tổ chức cho nhân dân làm thì giao cho xã  tự tổ chức thi công không chỉ định thầu cho doanh nghiệp.
3/ Khi chỉ định thầu phải u tiên cho các nhà thầu có phơng án thi công sử dụng nhiều lao động và vật t của xã có công trình.
4/ Cơ quan đợc Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt báo cáo đầu t thì phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu.
Điều 13 : Giám sát thi công :
Chủ đầu t, t vấn giám sát và Ban giám sát xã phối hợp thực hiện.
1/ Cán bộ giám sát công trình của Ban quản lý dự án (hoặc thuê t vấn giám  sát) trên cơ sở có đầy đủ t cách pháp nhân và đợc phép hoạt động theo quy định hiện hành.
2/ Mỗi xã thành lập Ban giám sát xã, Ban Giám sát xã bao gồm :
- Trởng Ban do tập thể Thờng trực Hội đồng Nhân dân và UBND xã cử.
- Các thành viên là đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh xã.
- Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giám sát xã.
Điều 14 : Nghiệm thu, bàn giao, quản lý  khai thác công trình :
1/ Khi công trình hoàn thành, chủ đầu t tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định, thành phần nghiệm thu gồm :  Chủ dự án, Trởng Ban quản lý Dự án, đơn vị thiết kế,  giám sát, thi công, đại diện Ban giám sát xã và cơ quan thẩm định hoặc phê duyệt thiết kế dự toán.
2/ Sau khi hoàn thành nghiệm thu công trình, chủ đầu t bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu về các vấn đề có liên quan đến công trình cho UBND xã. Thủ tục bàn giao đúng theo quy định hiện hành.
Riêng công trình khai hoang, sau khi hoàn thành UBND xã lập danh sách về diện tích, thông qua Hội đồng nhân dân xã và trình cấp có thẩm quyền quyết định giao quyền sử dụng đất cho từng hộ gia đình.
3/ Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý khai thác sử dụng công trình đúng theo quy định hiện hành.
Điều 15 : Cấp phát vốn Chơng trình 135:
1/ Cấp phát vốn đầu t :
Căn cứ quyết định giao kế hoạch Chơng trình 135 của UBND tỉnh, Sở Tài chính Vật giá chuyển vốn sang Kho bạc Nhà nớc tỉnh đối với các dự án thuộc tỉnh quản lý; chuyển vốn về ngân sách huyện đối với các dự án thuộc huyện, xã quản lý. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chuyển vốn sang Kho bạc Nhà nớc  huyện để kiểm soát, thanh toán theo quy định.
2/ Cấp phát vốn quản lý chơng trình :
2.1: Kinh phí hoạt động của Ban điều hành Chơng trình 135 tỉnh do Sở Tài chính cấp phát trực tiếp cho cơ quan Thờng trực Chơng trình 135 theo kế hoạch đợc UBND tỉnh giao hàng năm.
2.2: Kinh phí quản lý của Ban quản lý dự án tỉnh, huyện, xã do Kho bạc Nhà nớc cấp phát theo tỷ lệ % quy định so với giá trị dự toán xây lắp và thiết bị của công trình.
2.3: Nội dung chi hoạt động quản lý thực hiện theo quy định chung về quản lý đầu t XDCB hiện hành.
Điều 16: Thanh toán, tạm ứng vốn đầu t :
Thực hiện theo quy định tại Điềm 3, Khoản III, mục D Thông t Liên tịch số 666/2001/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu t - ủy ban Dân tộc và Miền núi - Tài chính - Xây dựng về hớng dẫn quản lý đầu t và xây dựng công trình hạ tầng thuộc Chơng trình 135.
 Điều 17 : Báo cáo và quyết toán tài chính :
1/ Báo cáo thống kê :
  1.1: Định kỳ tháng, quý, năm chủ đầu t dự án thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện Chơng trình 135 ở từng xã cho cơ quan Thờng trực Chơng trình 135 (Ban Dân tộc - Miền núi). Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông t số 894/2001/TT-UBDTMN ngày 13/11/2001 của ủy ban Dân tộc và Miền núi 
Ngoài biểu mẫu báo cáo, kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn về tình hình  thực hiện Chơng trình trong kỳ báo cáo.
1.2: Thờng trực Ban chỉ đạo Chơng trình 135 tổng hợp kết quả thực hiện Chơng trình 135 trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo cho UBND tỉnh và Thờng       trực Ban chỉ đạo Chơng trình 135 Trung ơng theo quy định.
1.3: Hàng quý cơ quan Thờng trực Chơng trình 135 của tỉnh tổ chức họp giao Ban với các Ban quản lý dự án Chơng trình 135 để nắm tình hình thực hiện chơng trình, bàn biện pháp tháo gỡ vớng mắc, khó khăn, kịp thời tham mu đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết.
2/ Báo cáo tài chính :
2.1: Theo định kỳ hàng quý, Chủ đầu t dự án, Kho bạc Nhà nớc huyện thực hiện báo cáo tài chính cho Kho bạc Nhà nớc tỉnh, cơ quan tài chính nơi chuyển vốn cấp phát và cho cơ quan Thờng trực Chơng trình 135 về kết quả tiếp nhận, thanh toán vốn đầu t xây dựng công trình ở xã.
2.2 : Kết thúc năm kế hoạch, chủ đầu t dự án lập báo cáo quyết toán việc sử dụng vốn gửi cơ quan Thờng trực Chơng trình 135, đồng gửi Kho bạc Nhà nớc huyện để báo cáo với Kho bạc Nhà nớc tỉnh và cơ quan tài chính nơi chuyển vốn cấp phát.
2.3 : Ngoài việc báo cáo và quyết toán theo quy định của Chơng trình, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách.
3/ Quyết toán vốn đầu t công trình hoàn thành :
3.1 : Khi kết thúc công trình chủ đầu t lập báo cáo quyết toán vốn đầu t công trình hoàn thành theo quy định tại Thông t số 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 của Bộ Tài chính và gửi cho cơ quan tài chính nơi chuyển vốn thẩm tra quyết toán vốn đầu t công trình hoàn thành.
Thời gian lập và gửi báo cáo quyết toán vốn đầu t không quá 3 tháng kể từ khi công trình hoàn thành đa vào khai thác sử dụng.
3.2 : UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu t công trình hoàn thành đối với các dự án do tỉnh quản lý.
3.3 : Đối với các nguồn vốn đợc cân đối chuyển về cho các huyện quản lý thì Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm thẩm tra và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán vốn đầu t công trình hoàn thành.
3.4 : Thời gian thẩm tra quyết toán vốn đầu t không quá 1 tháng sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Thời gian phê duyệt quyết toán vốn đầu t không quá 7 ngày sau khi nhận đợc đầy đủ hồ sơ đề nghị của cơ quan thẩm tra quyết toán theo quy định.
3.5 : Báo cáo quyết toán và quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu t công trình hoàn thành phải gửi cho cơ quan Thờng trực Chơng trình 135 của tỉnh để tổng hợp báo cáo cho Thờng trực Ban chỉ đạo Chơng trình 135 Trung ơng.
Điều 18 : Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm :
1/ Các thành viên Ban điều hành Chơng trình 135 tỉnh, các Sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm hớng dẫn và thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện dự án, chế độ quản lý đầu t xây dựng và quản lý tài chính của chủ dự án.
2/ Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chơng trình 135 đều bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Chơng III
Tổ chức thực hiện và Điều khoản thi hành

Điều 19 : Tổ chức thực hiện:
ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho cơ quan Thờng trực Ban điều  hành Chơng trình 135 tỉnh (Ban Dân tộc - Miền núi) căn cứ các văn bản hớng dẫn của các Bộ, ngành Trung ơng và bản quy định này để tập huấn cho các thành viên Ban quản lý dự án 135 huyện, xã, Ban giám sát xã và hớng dẫn tổ chức triển  khai thực hiện.
Điều 20 : Điều khoản thi hành :
Ban điều hành Chơng trình 135 tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan,Chủ tịch UBND các huyện và Ban quản lý các Dự án Chơng trình 135 tỉnh, huyện, xã có trách nhiệm thực hiện đúng quy định này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh, vớng mắc, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu t phản ánh về Thờng trực Ban điều hành Chơng trình 135 tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét giải quyết.

                 TM.UBND TỉNH BìNH THUậN 
                                   CHủ TịCH

				    
                                                         Huỳnh Tấn Thành